"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор ООО «Управление территориями» 	
				А.В. Вербицкая	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Студенческая, дом 23	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Студенческая, дом 23	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-20		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 865,72	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	450,33	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	10,78	тыс. руб.	
   строительных работ	1 865,72	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 497,2362758	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	37,3838984	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Окна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
Примечание: 1.1 / 0,0682; V=0,049+0,027	100 м2	0,076		0,076						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,56964					3 373,57	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	165,39		12,56964			268,39		3 373,57	
	2	ЭМ									29,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,58824					166,26	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	7,74		0,58824	37,32	1,36	50,76		29,86	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	7,74		0,58824			282,64		166,26	
		Итого прямые затраты									3 569,69	
		ФОТ									3 539,83	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					3 221,25	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					1 840,71	
		Всего по позиции							113 574,34		8 631,65	
2	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2	0,049		0,049						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,1537089					3 521,66	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	187,55	1,3225	12,1537089			289,76		3 521,66	
	2	ЭМ									133	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,355005					108,57	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	3,28	1,4375	0,231035			548,43		126,71	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,28	1,4375	0,231035			318,26		73,53	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,76	1,4375	0,12397	37,32	1,36	50,76		6,29	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,76	1,4375	0,12397			282,64		35,04	
	4	М									2 500,55	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	22,89		1,12161			6,88		7,72	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт	8		0,392	749,04	1,14	853,91		334,73	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м	418		20,482	24,39	1,47	35,85		734,28	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт	69		3,381	241,35	1,07	258,24		873,11	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м	20,7		1,0143	158,82	1,47	233,47		236,81	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт	60,6		2,9694	92,73	1,14	105,71		313,9	
		Итого прямые затраты									6 263,78	
2.1	[11.3.02.04-0024]
	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2	100		4,9	3 762,5	1,28	4 816		23 598,4	
		ФОТ									3 630,23	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					3 528,58	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					1 697,13	
		Всего по позиции							716 079,39		35 087,89	
3	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2	0,027		0,027						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1843719					1 502,22	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	145,19	1,3225	5,1843719			289,76		1 502,22	
	2	ЭМ									71,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1529213					47,76	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	3,28	1,4375	0,127305			548,43		69,82	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,28	1,4375	0,127305			318,26		40,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,66	1,4375	0,0256163	37,32	1,36	50,76		1,3	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,66	1,4375	0,0256163			282,64		7,24	
	4	М									1 068,5	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	15,41		0,41607			6,88		2,86	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт	8		0,216	749,04	1,14	853,91		184,44	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м	306		8,262	24,39	1,47	35,85		296,19	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт	53,25		1,43775	241,35	1,07	258,24		371,28	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м	15,75		0,42525	158,82	1,47	233,47		99,28	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт	40,1		1,0827	92,73	1,14	105,71		114,45	
		Итого прямые затраты									2 689,6	
3.1	[11.3.02.04-0037]
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2
	м2	100		2,7	3 803,08	1,28	4 867,94		13 143,44	
		ФОТ									1 549,98	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					1 506,58	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					724,62	
		Всего по позиции							669 045,93		18 064,24	
4	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
Примечание: 1.4 / 0,028	100 м	0,068		0,068						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,520208					429,67	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	19,44	1,15	1,520208			282,64		429,67	
	2	ЭМ									6,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0153					4,75	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,14	1,25	0,0119			548,43		6,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,14	1,25	0,0119			318,26		3,79	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,04	1,25	0,0034	37,32	1,36	50,76		0,17	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,04	1,25	0,0034			282,64		0,96	
	4	М									977,7	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт	4		0,272	749,04	1,14	853,91		232,26	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт	42,45		2,8866	241,35	1,07	258,24		745,44	
		Итого прямые затраты									1 418,82	
4.1	[11.3.03.14-1000]
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт	11,7647058		0,8	326,12	1,14	371,78		297,42	
4.2	[11.3.03.01-0007]
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м	100		6,8	273,79	1,28	350,45		2 383,06	
		ФОТ									434,42	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					422,26	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					203,09	
		Всего по позиции							69 480,15		4 724,65	
5	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
Примечание: 1.5 / 0,047	100 м2	0,061		0,061						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,8694505					1 658,94	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	83,67	1,15	5,8694505			282,64		1 658,94	
	2	ЭМ									3,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,102175					29,01	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,02	1,25	0,001525			1 642,67		2,51	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,02	1,25	0,001525			365,77		0,56	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,3	1,25	0,022875	37,32	1,36	50,76		1,16	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,3	1,25	0,022875			282,64		6,47	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	1,02	1,25	0,077775	2,31	1,2	2,77		0,22	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,02	1,25	0,077775			282,64		21,98	
	4	М									0,93	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,74		0,04514	35,71	0,58	20,71		0,93	
		Итого прямые затраты									1 692,77	
5.1	[04.3.02.05-0004]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т	1,23		0,07503	12 024,05	1,24	14 909,82		1 118,68	
5.2	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг	11		0,671	68,29	1,42	96,97		65,07	
		ФОТ									1 687,95	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 519,16	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					703,03	
		Всего по позиции							83 585,41		5 098,71	
6	ГЭСН15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
Примечание: 1.6 / 0,047	100 м2	0,061		0,061						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,73585					812,25	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	39	1,15	2,73585			296,89		812,25	
	2	ЭМ									6,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0129625					4,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,15	1,25	0,0114375			548,43		6,27	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,15	1,25	0,0114375			318,26		3,64	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,02	1,25	0,001525	37,32	1,36	50,76		0,08	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,02	1,25	0,001525			282,64		0,43	
	4	М									146,7	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,01891	56,11	1,62	90,9		1,72	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,051		0,003111	25 237,94	1,42	35 837,87		111,49	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,05124	531,44	1,23	653,67		33,49	
		Итого прямые затраты									969,37	
6.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т	0,063		0,003843	52 265,82	1,79	93 555,82		359,54	
		ФОТ									816,32	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					734,69	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					340	
		Всего по позиции							39 403,28		2 403,6	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Окна			57 569,64	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			11 298,31	
		   эксплуатация машин и механизмов			250,92	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			360,42	
		   материальные ресурсы			45 659,99	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			11 658,73	
		Итого накладные расходы			10 932,52	
		Итого сметная прибыль			5 508,58	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Окна			74 010,74	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			40,0332293	
		   затраты труда машинистов			1,2266038	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Козырьки над подъездами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2	0,0322		0,0322						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5324914					137,86	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	14,38	1,15	0,5324914			258,89		137,86	
	2	ЭМ									3,39	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	6,22	1,15	0,2303266			14,7		3,39	
		Итого прямые затраты									141,25	
		ФОТ									137,86	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					125,45	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					71,69	
		Всего по позиции							10 509,01		338,39	
8	ГЭСНр58-01-016-03
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест	0,03		0,03						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,8985					1 101,87	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	113	1,15	3,8985			282,64		1 101,87	
	2	ЭМ									5,61	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	1,19	1,15	0,041055			2,44		0,1	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	1,19	1,15	0,041055			126,02		5,17	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,18	1,15	0,04071	6,62	1,28	8,47		0,34	
	4	М									4,39	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,021		0,00063	4 800,85	1,45	6 961,23		4,39	
		Итого прямые затраты									1 111,87	
8.1	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	2,14		0,0642	3 778,62	1,23	4 647,7		298,38	
8.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,28		0,0384			0		0	
		ФОТ									1 101,87	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					991,68	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					506,86	
		Всего по позиции							96 959,67		2 908,79	
9	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2	0,0322		0,0322						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1192366					34,55	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	2,8	1,3225	0,1192366			289,76		34,55	
	2	ЭМ									1,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0018515					0,59	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,4375	0,0018515			548,43		1,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0018515			318,26		0,59	
		Итого прямые затраты									36,16	
9.1	[01.2.03.05-0004]
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов
	кг	45		1,449	29,92	1,72	51,46		74,57	
		ФОТ									35,14	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					34,47	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					17,03	
		Всего по позиции							5 038,2		162,23	
10	ГЭСН12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2	0,0322		0,0322						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6115134					190,27	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	14,36	1,3225	0,6115134			311,14		190,27	
	2	ЭМ									11,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0134234					5,29	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,09	1,4375	0,0041659			548,43		2,28	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0041659			318,26		1,33	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0023144			1 484,25		3,44	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0023144			427,52		0,99	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0069431	622,62	1,26	784,5		5,45	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0069431			427,52		2,97	
	4	М									55,45	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг	29,94		0,964068	41,38	1,39	57,52		55,45	
		Итого прямые затраты									262,18	
10.1	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	116		3,7352	195,07	1,81	353,08		1 318,82	
10.2	[12.1.02.03-0164]
	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2	114		3,6708	275,42	1,81	498,51		1 829,93	
		ФОТ									195,56	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					191,84	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					94,75	
		Всего по позиции							114 829,81		3 697,52	
11	ГЭСН12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м	0,043		0,043						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0187963					613,73	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	35,5	1,3225	2,0187963			304,01		613,73	
	2	ЭМ									43,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0531588					21,71	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0092719			548,43		5,08	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0092719			318,26		2,95	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,1	1,4375	0,0061813			1 484,25		9,17	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,1	1,4375	0,0061813			427,52		2,64	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,61	1,4375	0,0377056	622,62	1,26	784,5		29,58	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,61	1,4375	0,0377056			427,52		16,12	
	4	М									182,28	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг	32,49		1,39707	41,38	1,39	57,52		80,36	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	0,51		0,02193	3 778,62	1,23	4 647,7		101,92	
		Итого прямые затраты									861,55	
11.1	[12.1.02.03-0164]
	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2	252		10,836	275,42	1,81	498,51		5 401,85	
		ФОТ									635,44	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					623,37	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					307,87	
		Всего по позиции							167 317,21		7 194,64	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Козырьки над подъездами			11 336,56	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			2 078,28	
		   эксплуатация машин и механизмов			65,02	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			27,59	
		   материальные ресурсы			9 165,67	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			2 105,87	
		Итого накладные расходы			1 966,81	
		Итого сметная прибыль			998,2	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Козырьки над подъездами			14 301,57	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			7,1805377	
		   затраты труда машинистов			0,0684337	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 3. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
Примечание: 3.2 / 0,01	м3	0,3		0,3						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,20955					3 247,86	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	12,20955			266,01		3 247,86	
	2	ЭМ									106,44	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14835					51,93	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,069			1 484,25		102,41	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,069			427,52		29,5	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,07935	37,32	1,36	50,76		4,03	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,07935			282,64		22,43	
	4	М									360,59	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0132	35,71	0,58	20,71		0,27	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0759	3 859,62	1,23	4 747,33		360,32	
		Итого прямые затраты									3 766,82	
12.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,1206			15 496,86		1 868,92	
12.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,069			0		0	
		ФОТ									3 299,79	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					3 035,81	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					1 715,89	
		Всего по позиции							34 624,8		10 387,44	
13	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 3.3 / 0,328; V=1,276+0,172	100 м2	1,448		1,448						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			285,08224					82 605,43	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	285,08224			289,76		82 605,43	
	2	ЭМ									1 489,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,198064					699,56	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	2,198064			672,87		1 479,01	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	2,198064			318,26		699,56	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	1,182292	6,62	1,28	8,47		10,01	
	4	М									13 302,73	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,5068	35,71	0,58	20,71		10,5	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		3,1856	3 392,36	1,23	4 172,6		13 292,23	
		Итого прямые затраты									98 096,74	
13.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		7,00832			0		0	
		ФОТ									83 304,99	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					74 141,44	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					36 654,2	
		Всего по позиции							144 262,69		208 892,38	
14	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	1,448		1,448						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53,586136					15 527,12	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	53,586136			289,76		15 527,12	
	2	ЭМ									744,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,099032					349,78	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	1,099032			672,87		739,51	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	1,099032			318,26		349,78	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,599472	6,62	1,28	8,47		5,08	
	4	М									6 646,12	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		1,5928	3 392,36	1,23	4 172,6		6 646,12	
		Итого прямые затраты									23 267,61	
14.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		3,50416			0		0	
		ФОТ									15 876,9	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					14 130,44	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					6 985,84	
		Всего по позиции							30 651,86		44 383,89	
15	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2	1,448		1,448						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			135,88032					35 178,06	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	135,88032			258,89		35 178,06	
	2	ЭМ									120,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,216476					68,9	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,216476			548,43		118,72	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,216476			318,26		68,9	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,16652	6,62	1,28	8,47		1,41	
	4	М									71 135,78	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,26064	35,71	0,58	20,71		5,4	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		159,28	353,61	1,23	434,94		69 277,24	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,362	4 338,27	1,18	5 119,16		1 853,14	
		Итого прямые затраты									106 502,87	
		ФОТ									35 246,96	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					31 369,79	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					15 508,66	
		Всего по позиции							105 926,33		153 381,32	
16	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 3.4 / 0,1368	100 м2	0,061		0,061						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,68651					6 977,92	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	22,68651			307,58		6 977,92	
	2	ЭМ									125,42	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,185196					58,94	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,185196			672,87		124,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,185196			318,26		58,94	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,095404	6,62	1,28	8,47		0,81	
	4	М									1 120,37	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,02135	35,71	0,58	20,71		0,44	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,2684	3 392,36	1,23	4 172,6		1 119,93	
		Итого прямые затраты									8 282,65	
16.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,59048			0		0	
		ФОТ									7 036,86	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					6 262,81	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 096,22	
		Всего по позиции							289 207,87		17 641,68	
17	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 3.7 / 7,2425	100 м2	4,294		4,294						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			310,655871					109 198,65	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	310,655871			351,51		109 198,65	
	2	ЭМ									220,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			30,665601					8 667,32	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	2,814717	37,32	1,36	50,76		142,88	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	2,814717			282,64		795,55	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	27,850884	2,31	1,2	2,77		77,15	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	27,850884			282,64		7 871,77	
	4	М									23 105,72	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		1,76054	35,71	0,58	20,71		36,46	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,04294	215 084,63	1,89	406 509,95		17 455,54	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		8,588	531,44	1,23	653,67		5 613,72	
		Итого прямые затраты									141 191,72	
17.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		1 545,84	48,81	1,47	71,75		110 914,02	
		ФОТ									117 865,97	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					104 900,71	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					51 861,03	
		Всего по позиции							95 218,32		408 867,48	
18	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 3.8 / 11,71	100 м2	5,803		5,803						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			35,6862739					11 357,51	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	35,6862739			318,26		11 357,51	
	2	ЭМ									49,98	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1668362					50,13	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0834181			548,43		45,75	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0834181			318,26		26,55	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0834181	37,32	1,36	50,76		4,23	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0834181			282,64		23,58	
	4	М									52,75	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,5803	56,11	1,62	90,9		52,75	
		Итого прямые затраты									11 510,37	
18.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,0597709	60 840,08	1,19	72 399,7		4 327,4	
		ФОТ									11 407,64	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					10 266,88	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					4 751,28	
		Всего по позиции							5 317,24		30 855,93	
19	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 3.9 / 4,47	100 м2	1,509		1,509						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,7526123					6 845,55	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	21,7526123			314,7		6 845,55	
	2	ЭМ									36,79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0867675					26,84	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0650756			548,43		35,69	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0650756			318,26		20,71	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0216919	37,32	1,36	50,76		1,1	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0216919			282,64		6,13	
	4	М									30 345,67	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,22635	56,11	1,62	90,9		20,58	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		6,6396	531,44	1,23	653,67		4 340,11	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		362,16	48,81	1,47	71,75		25 984,98	
		Итого прямые затраты									37 254,85	
		ФОТ									6 872,39	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					6 185,15	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 862,35	
		Всего по позиции							30 684,13		46 302,35	
20	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 3.10 / 0,82	100 м2	0,43		0,43						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,95711					1 067,58	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	2,95711			361,02		1 067,58	
	2	ЭМ									19,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0123626					4,23	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0061813			548,43		3,39	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0061813			318,26		1,97	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0061813			1 642,67		10,15	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0061813			365,77		2,26	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	0,865375	5,67	1,18	6,69		5,79	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0061813	6,62	1,28	8,47		0,05	
	4	М									592,27	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		0,8385	60,6	1,18	71,51		59,96	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,00559	80 020,98	1,19	95 224,97		532,31	
		Итого прямые затраты									1 683,46	
		ФОТ									1 071,81	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					906,75	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					464,63	
		Всего по позиции							7 104,28		3 054,84	
21	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 3.11 / 0,82; V=0,43*2	100 м2	0,43	2	0,86						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,778606					2 036,63	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	6,778606			300,45		2 036,63	
	2	ЭМ									39,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0370875					12,39	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,024725			548,43		13,56	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,024725			318,26		7,87	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0123625			1 642,67		20,31	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0123625			365,77		4,52	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	0,8035625	5,67	1,18	6,69		5,38	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0123625	6,62	1,28	8,47		0,1	
	4	М									839,65	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		2,58	60,6	1,18	71,51		184,5	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,00688	80 020,98	1,19	95 224,97		655,15	
		Итого прямые затраты									2 928,02	
		ФОТ									2 049,02	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 733,47	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					888,25	
		Всего по позиции							12 906,37		5 549,74	
22	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 3.12 / 10,89	100 м2	5,373		5,373						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			99,4100371					30 549,53	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	69,5657086			318,26		22 139,98	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	29,2758651			282,64		8 274,53	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	0,5684634			237,51		135,02	
	2	ЭМ									254,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4634213					147,49	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,4634213			548,43		254,15	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,4634213			318,26		147,49	
		Итого прямые затраты									30 951,17	
22.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,247158	52 265,82	1,79	93 555,82		23 123,07	
22.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		75,222	98,12	1,19	116,76		8 782,92	
		ФОТ									30 697,02	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					27 627,32	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					12 785,31	
		Всего по позиции							19 220,14		103 269,79	
23	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 3.13 / 1,28; V=0,076+0,588	100 м	0,664		0,664						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,620676					8 937,27	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	31,620676			282,64		8 937,27	
	2	ЭМ									19,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,091632					26,99	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,030544			548,43		16,75	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,030544			318,26		9,72	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,061088	37,32	1,36	50,76		3,1	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,061088			282,64		17,27	
	4	М									863,93	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,002656	70 296,2	1,14	80 137,67		212,85	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,003984	149 930,17	1,09	163 423,89		651,08	
		Итого прямые затраты									9 848,04	
23.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,122176	91 285	1,06	96 762,1		11 822,01	
23.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,148736			0		0	
		ФОТ									8 964,26	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					8 067,83	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 123,56	
		Всего по позиции							50 996,14		33 861,44	
24	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 3.16 / 0,063	100 м2	0,0463		0,0463						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,969059					280,79	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	0,969059			289,76		280,79	
	2	ЭМ									0,29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0005325					0,17	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0005325			548,43		0,29	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0005325			318,26		0,17	
	4	М									30,01	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00463	56,11	1,62	90,9		0,42	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0004167	60 697,21	1,17	71 015,74		29,59	
		Итого прямые затраты									311,26	
24.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0007454	77 205,08	1,37	105 770,96		78,84	
		ФОТ									280,96	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					252,86	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					129,24	
		Всего по позиции							16 678,19		772,2	
25	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
Примечание: 3.18 / 0,142	100 м2	0,087		0,087						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,413705					1 989,76	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	7,413705			268,39		1 989,76	
	2	ЭМ									0,55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0010005					0,32	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0010005			548,43		0,55	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0010005			318,26		0,32	
	4	М									55,78	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0087	56,11	1,62	90,9		0,79	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0007743	60 697,21	1,17	71 015,74		54,99	
		Итого прямые затраты									2 046,41	
25.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0014007	77 205,08	1,37	105 770,96		148,15	
		ФОТ									1 990,08	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 791,07	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					915,44	
		Всего по позиции							56 334,14		4 901,07	
26	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,242		0,242						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,15681					11 206,68	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	39,15681			286,2		11 206,68	
	2	ЭМ									10,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,044528					13,18	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,016698			548,43		9,16	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,016698			318,26		5,31	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,02783	37,32	1,36	50,76		1,41	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,02783			282,64		7,87	
	4	М									1 784,8	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,04356	56,11	1,62	90,9		3,96	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0106722	25 237,94	1,42	35 837,87		382,47	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,2662	531,44	1,23	653,67		174,01	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,34848	2 507,62	1,23	3 084,37		1 074,84	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0021054	60 697,21	1,17	71 015,74		149,52	
		Итого прямые затраты									13 015,23	
26.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0055902	77 205,08	1,37	105 770,96		591,28	
		ФОТ									11 219,86	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					10 097,87	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					5 161,14	
		Всего по позиции							119 279,01		28 865,52	
27	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 3.19 / 11,74	100 м2	6,678		6,678						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			384,1769925					109 951,46	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	384,1769925			286,2		109 951,46	
	2	ЭМ									368,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6719738					213,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,6719738			548,43		368,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,6719738			318,26		213,86	
	4	М									25 325,26	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,060102	16 496,03	0,89	14 681,47		882,39	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,23373	91 734,54	1,14	104 577,38		24 442,87	
		Итого прямые затраты									135 859,11	
27.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		22,7052	625,83	1,53	957,52		21 740,68	
		ФОТ									110 165,32	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					109 063,67	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					64 611,96	
		Всего по позиции							49 606,98		331 275,42	
28	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
Примечание: 3.21 / 4,43; V=11,63*0,1	т	1,163		1,163			786,73		914,97	
		Всего по позиции									914,97	
29	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Примечание: 3.22 / 39,87; V=11,63*0,9	т	10,467		10,467			59,29		620,59	
		Всего по позиции									620,59	
30	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
Примечание: 3.23 / 44,3	т	11,63		11,63			186,89		2 173,53	
		Всего по позиции									2 173,53	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Фасад			813 622,71	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			436 957,8	
		   эксплуатация машин и механизмов			3 605,07	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			10 392,03	
		   материальные ресурсы			358 958,72	
		   перевозка			3 709,09	
		Итого ФОТ (справочно)			447 349,83	
		Итого накладные расходы			409 833,87	
		Итого сметная прибыль			212 515	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 3. Фасад			1 435 971,58	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 450,0225088	
		   затраты труда машинистов			36,0888609	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 524 283,89	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			882 528,91	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			450 334,39	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 921,01	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			10 780,04	
		      материальные ресурсы			413 784,38	
		      перевозка			3 709,09	
		   Всего ФОТ (справочно)			461 114,43	
		   Всего накладные расходы			422 733,2	
		   Всего сметная прибыль			219 021,78	
				
		ВСЕГО по смете			1 524 283,89	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			882 528,91	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			450 334,39	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 921,01	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			10 780,04	
		      материальные ресурсы			413 784,38	
		      перевозка			3 709,09	
		   Всего ФОТ (справочно)			461 114,43	
		   Всего накладные расходы			422 733,2	
		   Всего сметная прибыль			219 021,78	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			1 497,2362758	
		   затраты труда машинистов			37,3838984	
		Итого			1 524 283,89	
		Итого			1 524 283,89	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((1 524 283,89+0+0+0)*2%) = 30 485,68	2%	30 485,68	
		Итого			1 554 769,57	
		НДС	(1 554 769,57*20%) = 310 953,91	20%	310 953,91	
		Итого			1 865 723,48	
	
Составил:	 	С.М. Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		

	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор ООО «Управление территориями» ________________ А.В. Вербицкая	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Студенческая, дом 23	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Студенческая, дом 23	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,076	V=0,049+0,027			
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,049	V=0,049			
2.1	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	4,9	V=0,049*100			
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,027	V=0,027			
3.1	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2	2,7	V=0,027*100			
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,068	V=0,068			
4.1	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0,8	V=0,068*11,7647058			
4.2	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	6,8	V=0,068*100			
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,061	V=0,061			
5.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,07503	V=0,061*1,23			
5.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,671	V=0,061*11			
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,061	V=0,061			
6.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,003843	V=0,061*0,063			
7	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,0322	V=0,0322			
8	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,03	V=0,03			
8.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0642	V=0,03*2,14			
8.2	Строительный мусор	т	0,0384	V=0,03*1,28			
9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,0322	V=0,0322			
9.1	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг	1,449	V=0,0322*45			
10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,0322	V=0,0322			
10.1	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	3,7352	V=0,0322*116			
10.2	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	3,6708	V=0,0322*114			
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,043	V=0,043			
11.1	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	10,836	V=0,043*252			
12	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,3	V=0,3			
12.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,1206	V=0,3*0,402			
12.2	Строительный мусор	т	0,069	V=0,3*0,23			
13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	1,448	V=1,276+0,172			
13.1	Строительный мусор	т	7,00832	V=(1,276+0,172)*4,84			
14	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	1,448	V=1,448			
14.1	Строительный мусор	т	3,50416	V=1,448*2,42			
15	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1,448	V=1,448			
16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,061	V=0,061			
16.1	Строительный мусор	т	0,59048	V=0,061*9,68			
17	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	4,294	V=4,294			
17.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	1 545,84	V=4,294*120*3			
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	5,803	V=5,803			
18.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0597709	V=5,803*0,0103			
19	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	1,509	V=1,509			
20	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,43	V=0,43			
21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	0,86	V=0,43*2			
22	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	5,373	V=5,373			
22.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,247158	V=5,373*0,046			
22.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	75,222	V=5,373*14			
23	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,664	V=0,076+0,588			
23.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,122176	V=(0,076+0,588)*0,184			
23.2	Строительный мусор	т	0,148736	V=(0,076+0,588)*0,224			
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,0463	V=0,0463			
24.1	Краска масляная 	т	0,0007454	V=0,0463*0,0161			
25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,087	V=0,087			
25.1	Краска масляная 	т	0,0014007	V=0,087*0,0161			
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,242	V=0,242			
26.1	Краска масляная 	т	0,0055902	V=0,242*0,0231			
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	6,678	V=6,678			
27.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	22,7052	V=6,678*3,4			
28	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,163	V=11,63*0,1			
29	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	10,467	V=11,63*0,9			
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	11,63	V=11,63			
	
Составил:		А.И. Бабарыкин